자체종합감사 결과 및 조치 계획 보고

Ⅰ. 감사개요

ㅇ 기    간 : 2009. 8. 18(화) ~ 10. 16(금) (기간 중 13일간)

ㅇ 대상기관 : ㅇㅇ관리소, ㅇㅇ관리소, ㅇㅇ관리소 등 3개 소속기관

ㅇ 감사대상 : 前 자체감사 이후 추진한 업무 전반

ㅇ 감사중점 : 세입ㆍ세출예산집행, 공사 및 시설물 관리, 물품 및 유물관리, 국유재산 및 위탁관리 재산 등 적정성 여부

Ⅱ. 감사결과

ㅇ 행정상 조치 : 총 16건 (징계 1건, 경고 4건, 주의 8건, 개선 3건)

-	ㅇㅇ관리소	:	5건	(주의 3건, 개선 2건 / 환수 1건(352만 3,000원)
-	ㅇㅇ관리소	:	7건	(경고 3건, 주의 4건 / 환수 2건(2,632만원)
-	ㅇㅇ관리소	:	4건	(징계 1건, 경고 1건, 주의 1건, 개선 1건)

ㅇ 환수조치 : 3건 (2,984만 3,000원)

ㅇ 모범사례 : 5건

Ⅲ. 조치계획

ㅇ 감사결과 지적사항에 대한 처분요구 통보

ㅇ 해당 관련부서에 통보 조치

붙임 : 감사결과 지적사항 및 조치계획 1부.

감사결과 지적사항 및 처분요구

-  -

가. ㅇㅇ관리소(6건 : 주의 3건, 개선 2건, 모범 1건 / 환수 325만 3,000원)

지 적 내 용	처 분 요 구	비 고
▣ 공사하자 관리 및 하자보수보증금 등에 관한 사항 ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제61조(하자검사), 시행규칙 제70조(하자담보책임기간)등 관련법령에 따라 하자담보책임기간을 정하여 하자담보책임기간 동안 연 2회 이상 하자검사를 하여야 하나 이를 실시하지 않고 있으며, 하자보수관리부를(하자검수대장) 비치하여 기록관리를 하지 아니함 ㅇ 아울러 동 법령상 하자담보책임기간을 정하지 아니하는 경우 및 하자담보보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있는 경우는, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 인정하는 공사와 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사를 제외)이나 - ㅇㅇ관리소는 전 감사이후 3천만원을 초과하지 아니하는 공사라는 사유로 조경공사의 경우에 하자담보책임기간을 설정과 하자담보보증금을 받지 아니 하였음	ㅇ 하자담보책임기간 중에 있는 전 공사에 대해 관련법에 따라 년 2회 이상 하자검사를 실시토록 하고 ㅇ 향후 추진하는 공사에 대해서는 관련법에 따라 하자담보책임기간을 정하고 하자이행증권을 제출받는 등 하자관리업무에 신중을 기하여 주시기 바람	기관주의 (시 정)
▣ 자연생태학습장에 관한사항 ㅇ 2007년 4월 16일 자연생태학습장을 어린이 및 가족단위 관람객 등의 관람객 서비스 향상을 위해 ㅇㅇ조경상사와 1천980만원에 수의계약을 체결하여 조성하였으나, ㅇ 조성이후 감사일 현재 자연생태학습장을 방치하여 자연생태학습장의 수생식물과 일반 잡초 등이 혼재하는 등 자연생태학습장 으로서의 기능을 상실하여 관람객이 이용하지 않고 있으며, 자연생태학습장 조성이후 체계적인 활용을 위한 관리를 하지 아니 하였음	ㅇ 자연생태학습장으로서의 당초 기능을 수행할 수 있도록 관리담당자를 지정하는 등 주기적인 관리와 운영에 만전을 기하여 주시기 바람	개 선
▣ 폐기물 처리에 관한 사항 ㅇ 2006년 사업(ㅇㅇ공영/6,369천원)의 경우 혼합폐기물 물량을 산출하면서 야적된 폐기물의 체적을 22.60㎥로 산출한 후 이를 무게로 환산하는 과정에서 공극률(30%)을 감안하여 계산할 경우 총 10.3톤 정도이나 태릉관리소는 공극 없이 단순 체적 중량만을 따져 36톤을 반영하였으며 ㅇ 폐기물을 배출하는 과정에서는 폐기물의 종류 및 차량의 적재상태 등을 차량마다 면밀히 확인한 후 서명하여야 하나 이를 간과함 ㅇ 또한 배출된 혼합폐기물은 잔가지와 톱밥에 대부분이며 약간의 쓰레기 가 혼재되어 있는 상태로 이를 분리하여 처리 할 경우 폐목재(3~4만원)로 처리가 가능한 경우인데도 이를 간과하고 혼합폐기물(97,000원)로 처리함으로써 사업비가 불필요하게 추가 소요(57,000원×36톤=2,052천원)되었음 ㅇ 2009년 사업(ㅇㅇ/18,982천원)의 경우 경내 화장실 1동을 철거하는 사업의 경우 화장실에서 배출될 수 있는 혼합폐기물은 석면, 화장실칸막이 등으로 한정되어 비교적 물량산출이 용이하나 구체적인 산출서를 작성하지 않고 견적업체(ㅇㅇ공영)에서 과도하게 산정한 처리물량 31톤을 그대로 인정하였으며 처리비용도 운반비가 포함되었다고는 하나 2009년 처리단가 97,000원의 2배인 189,000원을 반영한 것을 그대로 인정하였음 ㅇ 또한 도면이 없어 정확하게 산출되지 않은 지하구조물의 폐기물 물량에 대해서는 공사 과정에서 그 종류 및 물량을 정확히 확인하고 당초 계약물량과 비교하여 설계변경 등을 시행하여야 하나 이를 시행하지 않았으며 폐기물 반출 차량의 대수만을 확인한 상태에서 공사업체의 계량증명서를 그대로 인정하여 준공검사를 하였음	ㅇ 향후부터는 폐기물 물량의 산출 및 처리에 있어 물량 및 종류를 정확히 확인․서명하고 사진을 촬영하여 기록으로 남기며, 처리업체의 계근 중량 등을 확인하는 등 감독 및 검수업무에 만전을 기하여 주시기 바람	주 의
▣ 홍보 강화 및 주차 공간 확보에 관한 사항 ㅇ 왕릉의 세계문화유산 등재를 계기로 왕릉에 대한 국민의 관심이 확대되고 있는 상황이지만 ㅇㅇ의 경우 왕릉으로서의 ㅇㅇ보다 소재지 지명(서울시 성북구 ㅇㅇ동)으로서의 ㅇㅇ에 대한 인식이 강하고 진입로가 협소하여 지역민을 제외한 일반 관람객의 접근이 용이하지 않은 상태임 ㅇ 실제로 감사기간 동안 몇 차례 택시로 ㅇㅇ을 찾은 결과 ㅇㅇ의 위치를 정확히 인식하고 안내하는 기사가 거의 없었으며 잘못 안내하는 경우가 대부분으로 ㅇㅇ의 인식 전환을 위한 홍보강화 등 대책마련이 요구됨 ㅇ 또한 주차장의 경우 주차규모가 10대로 주말에 정릉을 찾는 지역민의 주차수요에도 턱없이 모자란 상태로 운영되고 있으며 승합차 및 버스의 경우 공간이 협소하여 돌아갈 수 없는 상태로 기관 홍보 및 관람객 유치에 걸림돌이 되고 있어 현재 재개발이 검토되고 있는 인접 부지의 확보 등 주차 공간 확보를 위한 대책마련이 필요한 실정임	ㅇ 지역명이 아닌 조선왕릉 으로서의 ㅇㅇ으로 각인 될 수 있도록 일반국민을 대상으로 한 홍보대책을 수립 시행하여 주시고 ㅇ 입구 주차장이 협소하여 버스를 이용한 단체관람객의 관람이 어려운 점을 개선할 수 있도록 주차장 면적 확장 등을 검토하여 주시기 바람	개 선
▣ 매표소 및 직원대기실 개축공사에 관한사항 ㅇ 2006년 11월 24일 주)ㅇㅇ건설과 매표소 및 직원대기실 개축공사를 153,992천원에 계약하여 착수한 후 문화재현상변경허가 과정에서 전문가 자문을 받아 시행토록 권고되었고, 향후 자문내용에 따라 설계변경 계약을 추진하면서 공사금액 변경 없이 공사내용 만을 조정하는 변경계약을 체결하였으나 ㅇ 변경 내역 및 현장을 검토한 결과 사고석 담장 및 기와 물량을 과다계상 하였거나 설계변경으로 삭제되어야 할 철근구입 및 조립비, 거푸집 설치비 등을 그대로 반영하는 등의 문제가 있었으며, 이로 인해 공사비 3,253천원이 과다 지급된 사실이 있음	ㅇ 설계변경과정에서 사실과 다르게 시공되거나 과다 지급된 공사비를 환수하시기 바람 (환수금액 3,253천원)	기관주의 (환 수)
▣ 무단 점유 국유재산 철거 및 환수 ㅇ 기부채납으로 인한 무상사용 기간이 경과(2000년 10월)한 이후에도 지속적으로 무단 사용해 오던 ㅇㅇ정(1972년 건립, 54.98㎡) 철거를 위해 지속적으로 노력한 결과 동 시설물을 2008년 7월 소유자가 직접 철거함에 따라 훼손된 산림과 ㅇㅇ 권역 복원 사업의 토대 마련. ㅇ ‘07년 6월부터 ㅇㅇㅇ묘 재실에서 무단으로 거주해 온 거주자에 대해 수차례의 면담과 다양한 노력을 통해 ‘09, 6. 29일 자진퇴거토록 함으로써 ㅇㅇㅇ묘 재실 복원의 기틀 마련	ㅇ 2009년 자체감사 우수사례 포상 대상사업에 포함하여 심사	모범사례

-  -

나. ㅇㅇ관리소(9건 : 경고3건, 주의4건, 모범 2건 / 환수 2,632만원)

지 적 내 용	처 분 요 구	비 고
▣ ㅇㅇㅇ사격장 납탄 오염 고사목 벌채공사 추진에 관한 사항 ㅇ ㅇㅇㅇ사격장 주변의 고사목(은사시나무 등 3종, 515주/지름 10-22㎝) 벌채공사를 2009. 5. 6 ~ 5. 21일까지 주)ㅇㅇ건설과 10,000천원에 수의계약하여 공사를 완료한 상태이나 ㅇ 공사 준공사진 및 ㅇㅇ관리소 비정규직 일일 작업일지 등을 확인한 결과 업체가 공사에 착공하기 전인 2009.4.30일부터 완료일 이후인 2009.5.24일 사이에 ㅇㅇ관리소 직원(비정규직)이 20일간 상기 공사에 참여하여 공사를 완료한 것으로 확인됨 ※ 요구한 사업비보다 책정된 사업비가 부족한 상태에서 그 비용으로는 공사에 참여하는 업체가 없어 일부 직원이 공사에 참여하여 도와주고 그 대가로 작업반에서 회식비를 받은 것으로 주장	ㅇ 향후부터는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 작업반(비정규직) 운영 및 관리에 철저를 기하여 주시기 바람	경 고
▣ 폐기물 처리에 관한 사항 ㅇ 소내에서 발생된 폐기물을 처리하기 위하여 2007년 11월부터 2009년 9월까지 3건의 폐기물 처리 용역계약을 체결하여 완료한 상태이나 확인결과 다음과 같이 반출되는 폐기물 물량의 확인 및 정산을 하지 않거나 미흡하게 한 것으로 확인됨 ㅇ 2007년 11월9일 주)ㅇㅇ산업개발과 수의계약(15,000천원)을 체결하여 시행한 태릉 연못주변 정자 6동에 대한 폐기물 처리 공사는, 준공 시 반출 및 처리 확인서를 제출받지 않은 상태에서 계약금액 전액을 지급하였으며 ㅇ 2008년 11월 14일 주)ㅇㅇ산업과 수의계약(25,047천원)을 체결하여 시행한 사격장 부속건물 7동에 대한 폐기물 처리 공사에 있어서는 태릉관리소 직원이 서명하여야 하는 란에 업체 직원이 서명한 건설폐기물간이인계서가 완료 신고서에 첨부되어 있으며, - 준공사진 상에는 11월 18일 철거가 이미 완료된 상태였으나 폐기물인계서상에는 23일 날에도 현장에서 폐콘크리트 414.92톤과 혼합건설폐기물 19.48톤이 배출된 것으로 완료신고 서류를 제출하였으나 ㅇㅇ관리소는 이를 확인․정산하지 못하고 계약금액 전액을 지불함 ㅇ 2009년 9월 17일 주)ㅇㅇ산업과 수의계약(13,600천원)을 체결하여 시행한 구 체육부대 연병장 폐기물 처리 공사에 있어서는 - 태릉관리소 직원이 반출되는 차량마당 건설폐기물간이인계서에 서명한 물량은 총 660톤 이었으나 - 공사완료 후 업체가 제출한 건설폐기물간이인계서 상에는 ㅇㅇ관리소 직원이 서명한 인계서가 아닌 업체 직원이 서명한 인계서에 당초 계약물량인 720.57톤을 모두 반출한 것으로 증명서를 바꾸어 제출하였는데도 - ㅇㅇ관리소에서는 이를 확인․정산하지 않고 계약금액 전액을 지불하여 공사비 1,900천원(폐콘 59.67톤 처리비 110만원, 철거비 80만원)이 과다 지급된 사실이 있음	ㅇ 향후부터는 폐기물 물량의 산출 및 처리에 있어 물량 및 종류를 정확히 확인․서명하고 사진을 촬영하여 기록으로 남기며, 처리업체의 계근 중량 등을 확인하는 등 감독 및 검수업무에 만전을 기하여 주시기 바라며 ㅇ 과다지급된 2009년 처리비용을 즉시 환수하시고, 허위서류를 제출한 2008년 공사 업체에 대해서는 관련법에 따라 해당기관에 부업당업체로 통보하는 등의 조치를 취하시기 바람 (환수금액 총 190만원)	경 고 (환 수/ 부정당업체 통보)
▣ 국유재산 관리에 관한 사항 ㅇ ㅇㅇ관리소는 관할 구역 내 국유재산인 ㅇ릉2동 산223-19번지에 ㅇㅇ텔레콤(2005.4.14), ㅇㅇ텔레콤 (2003.6.27), ㅇㅇㅇㅇ텔(2003.5.20)이, ㅇ릉2동 26번지에 ㅇㅇㅇㅇㅇ(미확인), ㅇㅇ WIBRO(2006.11.10)가 중계기를 설치했음에도 국유재산사용수익허가 및 사용료 징수 처분을 하지 않았고 2005년도부터 (재)한국ㅇㅇㅇㅇ회에서 임대료를 징수(24,420천원) 해왔음 - ㅇㅇ관리소는 2009년도 4월에 이 사실을 인지하여 중계기를 모두 철거하였으나 (재)한국ㅇㅇㅇㅇ회에서 우리청과 협의 없이 3개 통신사로부터 무단 징수한 사용료(24,420천원)에 대한 환수 등 조치를 취하고 있지 않은 상태임 ㅇ 국방부로부터 관리환 결정(2008.12월)된 ㅇㅇ동 산223-19번지의 지상 건물 3동(3,578㎡)이 건축물대장 등록 및 등기부 등기가 되어 있지 않음 ㅇ 국유재산인 ㅇㅇ동 산225번지 토지의 임야대장과 등기부, 산224번지 건물의 건축물대장과 등기부의 명의가 문화재관리국으로 되어 있음	ㅇ (재)한국ㅇㅇㅇㅇ회에서 국유재산 소유자인 우리 청과 사전협의 없이 부당 징수한 통신 중계기 사용료(24,420원)에 대해 계약서 및 관련법령을 충분히 검토한 후 환수 등 조치하시기 바람 (환수금액 총 2,442만원) ㅇ 국유재산법 제11조의 규정에 의거 그 소관에 속하는 국유재산의 변동에 관하여 지체 없이 등기ㆍ등록 등 기타 권리보전에 필요한 조치를 취하여 주시기 바람	기관경고 (환 수)
▣ 불용물품의 처리에 관한 사항 ㅇ ‘09년도 재물조사 결과 불용처리(2009.10.1)하여 불용된 물품 중 입형보일러 2대(1,850천원)는 내용연수가 도래하지 않았음에도 불용처리(수리비용 과다) 하였고, 불용처리하여 폐기 검수까지 완료한 입형보일러 1대가 사무동 뒤 공간에 방치되어 있음	ㅇ 향후부터는 물품관리법에 의한 내용연수 동안 충실히 사용할 수 있도록 물품 관리에 만전을 기하고 불용물품의 결정 및 처분에 신중을 기하여 주시기 바람	기관주의
▣ 예산회계집행 예산과목 미준수에 관한 사항 ㅇ 세출예산집행지침에 따라 무전기 충전지(550천원)는 일반수용비(210)로 구입하여야 함에도 인건비 (110)로 구입(2007.4.4)하였고, 물품관리법 제19조 규정에 의한 재물조사 대상이 되는 물품인 사무용컴퓨터 및 모니터(1,035,000원)는 자산취득비로 구입하여야 함에도 일반수용비(210)로 구입(2008.12.24)함	ㅇ 세출예산집행지침에 따라 예산집행 및 자산 취득이 이루어질 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바람	기관주의
▣ 불암산 산책로 경계휀스 설치공사에 관한사항 ㅇ 2008년 7월 1일 ㅇ릉관리소 부지를 지나는 ㅇㅇ산 등산로(580m)를 개방하게 되면서 산책로 주변에 경계휀스 설치를 위한 설계용역(ㅇㅇ개발 3,000천원)을 실시하였으며 설계된 D형 경계휀스는 경간당 148천원(290경간)의 가격으로 설계되었으나 ㅇ 2008년 11월 공사를 발주하면서는 설계금액에 따른 조달청 G2B 시스템을 통한 경쟁입찰을 추진하지 않고 특정업체로부터 동일 물품에 대해 새로이 견적을 받아 경간당 194천원, 총 사업비 59,000천원의 예산을 반영한 후 조달청에 제3자 단가계약 되어있는 물품의 구매를 추진하였음 ㅇ 단가계약된 조달물품의 구매를 추진하는 경우에는 공사설계가 필요 없는 경우인데도 설계를 추진하고 설계서가 마련되었다면 G2B 시스템을 통해 공개경쟁 입찰을 실시하였어야 함에도 원칙 없이 사업을 추진하여 설계된 금액보다 경간당 46천원(총 공사비 13,340천원) 높게 조달구매를 추진한 사실이 있음	ㅇ 향후부터는 사업 착수 단계에서부터 사업계획을 면밀히 수립․시행하여 예산이 낭비되는 사례가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바람	주 의
▣ 공사 업체 선정에 관한사항 ㅇ 2008년 7월 11일ㅇㅇ릉 소화전 설치 등을 위해 시행한 설계용역은 소방시설공사업법에 따른 소방시설설계업 등록을 한 자와 계약을 체결하여 시행하여야 하나 주)ㅇㅇ건설(건축업체) 직원이 소방기사 자격증을 소지하고 있다는 이유로 적법하지 않은 계약(계약금액 3,500천원)을 체결하여 하여 시행한 사실이 있으며 ※ 단 실제 설계는 소방설계 업체에 하도급 주어 시행함 ㅇ 또한 설계결과 태강릉 소화전 설치공사의 공사금액은 56,000천원이나 이를 3개 공사로 분리한 후 2009년 8월 27일 설계를 시행한 ㅇㅇ건설과 3건의 계약을 체결한 사실이 있음 ㅇ 2009년 4월13일에는 분전반 설치 공사 등이 포함된 전기공사(7,340천원)를 추진하면서는 전기통신공사업법에 의한 전기공사업 등록을 한 자와 계약을 체결하여 시행하여야 함에도 일반 건축업체(ㅇㅇ건설)와 계약하여 적법하지 않은 계약을 체결한 사실이 있음	ㅇ 향후부터는 관련법에 따라 자격을 갖춘 업체가 설계 및 시공에 참여할 수 있도록 관련법령을 숙지 및 회계업무 관리에 만전을 기하여 주시기 바람 ㅇ 또한 계약업무의 투명한 집행 및 동종 업체의 참여기회 확대를 위해 시행되고 있는 ꡒ견적입찰 세부기준ꡓ을 필히 준수하여 계약업무를 수행하시기 바람	주 의 (기관주의)
▣ 식목일 나무심기 행사 지속적 추진 ㅇ 매년 식목일 행사의 일환으로 소 내 수목 저밀도 지역(하천주변, 능침주변에)에 소나무 및 전나무를 사릉에서 분양받아 자체 인력(직원포함)으로 보식작업을 시행해 오고 있음 ㅇ 2009년에는 소나무 160주, 전나무 150주를 식재하였으며, 참나무 60주를 벌목하여 공사비 9,100천원을 절감하였음	ㅇ 2009년 자체감사 우수사례 포상 대상사업에 포함하여 심사	모범사례
▣ 다양하고 실용적인 홍보물 제작 배포 ㅇ 별도의 비용을 들이지 않으면서도 ㅇ릉을 효과적으로 홍보할 수 있는 홍보물(행사안내 소책자, 야생화수첩, 조선왕계도 사진첩)을 제작 배포하여 관람객의 호응과 왕릉에 대한 이해도를 제고하여 홍보 효과를 극대화하고 있으며 ㅇ 매년 4월에는 자체 촬영한 야생화 48종, 수목 43종에 대한 사진전을 개최하는 등 관람객에게 스스로 볼거리를 만들어 제공하고 있음	ㅇ 2009년 자체감사 우수사례 포상 대상사업에 포함하여 심사토록 함	모범사례

-  -

다. ㅇㅇ관리소(6건 : 징계 1건, 경고 1건, 주의 1건, 개선 1건, 모범 2건)

지 적 내 용	처 분 요 구	비 고
▣ 유물 관리에 관한 사항 ㅇ ㅇㅇ관리소는 1983 ~ 1984년 유물에 대한 유물대장을 작성하여 유물을 관리하고 있으나, - 유물대장 작성 시 정전 공신당의 배향공신 83분의 신주, 의민황태자 영왕의 신주(영녕전 16실 1973년 부묘), 의민황태자비(이방자 여사, 영녕전 16실 1992년) 신주를 등록 대장에 기록하지 않고 관리하고 있음 ㅇ 유물대장 작성 후 ‘92년 궁중유물전시관으로 480점 이관, ‘94년 궁중유물전시관으로 680점 이관, ‘05년 국립고궁박물관으로 유물 12,786점 등 총 13,946점을 이관 후 - 유물대장 번호를 재분류하지 않고 사용하고 있으며, 소장유물의 훼손여부를 파악할 수 있는 유물대장 작성 및 훼손정도에 따른 유물등급 부여가 이뤄지고 있지 않음 ㅇ 또한, 동 소는 소장유물의 출납상황에 대해 기록관리를 하여야 하나, 문화재청 훈령인 「유물취급규정」의 유물출납부는 내부 전시 및 외부 대여 시 출납상황을 반영할 수 없어 외부대여 및 내부전시를 위한 소장유물의 출납상황을 유물출납부 등으로 관리하고 있지 않음	ㅇ 국립고궁박물관으로 이관된 유물에 대해 이력관리를 한 후, 정전 공신당 배향공신 83분의 신주, 의민황태자 및 황태자비 신주와 소장유물의 훼손정도를 파악할 수 있는 유물대장 작성 및 유물등급 분류하여 소장유물 관리에 만전을 기해주시기 바람 ㅇ 소장유물의 내부 전시 및 외부대여시의 출납상황을 반영하여 유물출납부를 기록관리해주시기 바람	개선
▣ 명칭 사용에 관한 사항 ㅇ ㅇㅇ의 영문 공식명칭은 Jongmyo Shrine 임에도 Jongmyo Royal Ancestral Shrine (영문 안내 팜플릿, 종합안내판, 사진전 도록)으로 잘못 사용하는 사례가 있는바, 혼란 방지를 위해 공식 명칭을 준수할 필요가 있음 ㅇ 정전 구역 내에 있는 건축물 중 하나인 칠사당은 등기부에 “침사당”으로 명칭이 잘못 등재 되어 있음	ㅇ 향후부터는 ㅇㅇ의 영문 사용시 공식명칭으로 사용하여 주시고, 등기부에 잘못 등재되어 있는 “침사당”을 “칠사당”으로 정정해 주시기 바람	기관주의 (시정)
▣ 관람료 수입금 지연 납입 ㅇ ㅇㅇ관리소는 ‘08년 관람권 판매 시스템 관리업체(시스퀘어)로 부터 사후 정산 입금 된 관람료 신용카드(T-머니, 후불카드 포함) 결재 금액 과 현금 수입금 등을 1개월 이상 지연 납입하였으며, ‘09년에도 총 41회에 걸쳐 000원을 횡령한 후 미납하는 등 ’08부터 현재까지 총 75회 000원을 횡령한 후 유용한 사실이 있음.	ㅇ 관람료를 지연 납부한 관련자 고발 및 중징계 요청	관련자 고발 및 중징계요구
▣ 구 관람권 보관 관련 ㅇ 관람권 전산 발매기기의 고장에 대비하여 보관토록 되어 있던 구 관람권 중 일부를 궁능관리과의 지시에 의거 파기하면서 파기와 관련된 증빙(파기 과정 및 결과 보고서 등)없이 15,775매를 파기한 사실이 있음.	ㅇ 구 관람권 폐기 업무를 미흡하게 수행한 종묘관리소에 대해 기관 경고 및 향후 구 관람권 폐기 시 관련 업무에 만전을 기해 주시기 바람	기관 경고
▣ ㅇㅇ 애니매이션 홍보 영상물 제작 및 활용 ㅇ 어린이를 대상으로 한 홍보용 영상물을 제작함에 있어, 홍보 영상물 전체를 애니매이션으로 제작하는 경우 4천 여 만원의 예산이 소요되어, 실사영상물과 애니매이션을 적절히 사용하는 기법으로 제작함에 따라 예산을 2천여 만원 절감하였으며, - 실사영상물을 사용함으로써 홍보영상물의 품질 향상은 물론 사실감 있는 홍보 영상물 제작으로 어린이들로부터 큰 호응을 받고 있음	ㅇ 2009년 자체감사 우수사례 포상 대상사업에 포함하여 심사	모범사례
▣ ㅇㅇ 제수 진설 체험 프로그램 운영 ㅇ 제례에 관심 있는 일반인들을 대상으로 ㅇㅇㅇㅇ 제수진설에 대한 이론교육 및 직접 진설에 참여하는 기회를 제공함으로써 품격 있는 우리 고유의 왕실문화와 ㅇㅇ에 대한 이해의 폭을 확대시켰음은 물론 ㅇㅇ 본래의 기능인 제례공간으로서의 문화재 활용 극대화에 크게 기여함	ㅇ 2009년 자체감사 우수사례 포상 대상사업에 포함하여 심사	모범사례

-  -