석조문화재 보존처리공사 지침

제1조 (목적) 이 지침은 석조문화재의 보존처리를 시행함에 있어 공사감독자 및 수리기술자 등 수리관련자가 업무를 수행할 때 활용함으로써 석조문화재의 보존을 향상하는데 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위) 석조문화재의 보존처리에 대하여는 다른 법령의 특별한 규정 등이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에 의한다.

제3조 (설계시행) 보수대상에 대한 다음 각호의 현황조사를 실시하여 설계도서를 작성한다.

1. 석조문화재에 대한 현황을 사진촬영(전경, 근접)하여 설계도서를 작성한다.

2. 석조물 주변의 건물, 수목, 석물 등 현황을 기록하고 실측한다.

3. 전체적인 석물에 대한 파손, 균열, 풍화정도, 마모, 멸실부재와 생물체의 종류, 발생분포 등을 기록 실측하여 현황도를 작성하고 보수방안에 대한 각각의 특기시방서를 작성한다.

4. 설계 시에는 관계전문가의 의견을 수렴하여 필요시 설계에 반영한다.

제4조 (자문회의 개최 등) ①자치단체의장은 다음 각 호의시기에 따라 관계전문가가 참여한 자문회의를 개최하여 보존처리 업무를 수행하여야 한다.

1. 보존처리 전

2. 보존처리 시 표면 세척정도, 처리효과 평가 등 자문이 필요한 경우

3. 보존처리 후

②자치단체의장은 자문회의 개최 시 관계 직원이나 전문가를 참여시켜 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다.

③자문회의에 소요되는 비용은 필요시 설계에 반영할 수 있다.

제5조 (공사계약 및 착공) 자치단체의장은 공사계약를 체결한 때에는 15일 이내에 문화재청장에게 공사계약 및 착공서류 등을 제출하여야 한다.

제6조 (보존처리전) ① 석조문화재 처리 전 현상을 사진촬영 등 기록으로 남겨 수리보고서에 수록한다.

②보존처리 전 보수대상의 보수범위를 설정하기 위한 자문회의를 개최 (국립문화재연구소 및 관계전문가 참여)하여 보수방안을 결정한다.

(처리방법, 처리정도, 약제선정 및 사용 등)

제7조 (보존처리 방법) 보존처리 시에는 다음 각호의 사항을 준수하여 보존처리에 임해야 한다.

1. 에어콤퓨레셔를 사용해서 표면의 흙먼지 등을 제거할 것.

2. 대나무칼, 붓, 솔 등을 사용해서 석조문화재 표면생물체를 제거할 것.

3. 제거되지 않은 고착지의류 등은 살생물제를 분무 또는 도포하여 조심스럽게 제거하되 무리하게 제거하지는 말 것.

4. 살생물제는 제조사의 사용법에 따라 처리하여 표면에 남아있는 생물체를 고사 및 사멸시킨다.

5. 살 생물제 분무 또는 도포 시 처리시간 경과 후 즉시 증류수로 잔류약제를 씻어낸다.

6. 석조문화재 표면이 건조된 후 부드러운 솔을 사용하여 표면에 있는 잔유물을 제거한다. 이 과정에서 필요시 증류수를 사용하며 제거 정도는 자문회의에서 결정한다.(자문회의 : 표면 세척정도, 처리효과 평가 등)

7. 부재의 접합복원시 최대한 기존 부재를 사용함을 원칙으로 하나 부득이 신부재를 반입하여 사용할 경우에는 기존부재와 동일한 재질 및 유사한 색상의 석재를 사용하여야 하며, 기존 석재의 색상과 맞게 고색처리를 하여야 한다.

제8조 (보존처리 후) 보존처리가 완료된 후에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 평가하여야 한다.

1. 석조문화재의 처리 후 현황을 사진 촬영하여 수리보고서에 수록한다.

2. 석조문화재의 생물체 제거 보존처리 결과를 관계전문가 자문회의에서 평가하여 준공계에 첨부하여 제출한다(자문회의 개최).

3. 문화재에 대한 보존처리 및 보수이력, 처리부분 도면 표시, 처리방법, 재료, 사진자료 등에 대한 상세보고서를 작성 제출한다.

제9조 (사후관리) ①자치단체의장은 보존처리가 완료된 석조문화재에 대하여는 주기적으로 점검을 실시하여 생물체에 의한 훼손을 방지하여야 한다.

② 하자보수 및 관리는 자치단체의 장 이 하는 것을 원칙으로 한다.

제10조 (기타)  보존처리는 문화재보호법 제7조의3과 동법시행규칙 제11조에 의거 보존과학업체로 등록된 수리업자가 시행토록 하여야 한다.

부   칙

① (시행일) 이 지침은 2006. 6. 부터 시행한다.

② (설계 및 공사중에 있는 사업의 경과조치) 이 지침 시행당시 설계 및 공사 중에 있는 사업에 대하여는 이 지침에서 정한 일정에 해당하는 단계부터 적용한다.